załącznik nr 1A
ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH I PROCEDURALNYCH 	TERMIN
WYKONANIA
liczony w dniach kalendarzowych	CENA
% wartości zamówie-nia [zł]	
	Proje-ktant	Zama-wiający		
ETAP I	1. Ogłoszenie i zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia  planu miejscowego	Projektant	60 dni	-	30 %

………..zł	
	2. Opracowanie inwentaryzacji terenu oraz oceny istniejącego stanu zagospodarowania (opis + fotografie), dla którego sporządzany jest plan miejscowy, przygotowanie niezbędnych analiz, w tym m. in.: analizę terenów w kontekście klasyfikacji klasoużytków, analizę wniosków złożonych przed przystąpieniem do sporządzenia planu miejscowego, analizę stanu istniejącego oraz analizę proponowanych ustaleń sporządzanego planu miejscowego w  zakresie jego zgodności z ustaleniami studium

	3. Opracowanie karty terenu, dla którego sporządzany będzie plan miejscowy zgodnie ze wzorem zamieszczonym w punkcie 1.1 niniejszego harmonogramu					
	4. Zebranie oraz przedstawienie Zamawiającemu propozycji rozpatrzenia wniosków oraz  materiałów wymaganych w I etapie					
	5. Weryfikacja przedłożonego materiału 	Zamawiający	-	7 dni	-	
ETAP II	1. Wykonanie oraz przedstawienie Zamawiającemu projektu planu miejscowego z propozycją rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia wniosków, prognozy oddziaływania na środowisko oraz prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego	Projektant	30 dni	-	30 %

………..zł	
	2. Weryfikacja przedłożonego materiału oraz rozstrzygnięcie Wójta Gminy Sońsk o sposobie rozpatrzenia wniosków złożonych do projektu planu	Zamawiający	-	7 dni	-	
ETAP III	1. Uzgodnienie i opiniowanie projektu planu miejscowego	Projektant	90 dni	-	20 %

………..zł	
	2. Wprowadzenie zmian wynikających z dokonanych uzgodnień oraz przedstawienie Zamawiającemu projektu planu miejscowego					
	3. Weryfikacja przedłożonego materiału	Zamawiający	-	7 dni	-	
ETAP IV	1. Ogłoszenie i obwieszczenie o wyłożeniu  do publicznego wglądu projektu planu miejscowego	Projektant	90 dni	-	10 %

………..zł	
	2. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu miejscowego 					
	3. Zebranie oraz przedstawienie Zamawiającemu propozycji rozpatrzenia uwag oraz wprowadzenie zmian do projektu planu miejscowego wynikających z uwzględnienia uwag					
	4. Weryfikacja przedłożonego materiału, rozstrzygnięcie Wójta Gminy Sońsk o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu	Zamawiający	-	7 dni	-	
ETAP V	1. Przekazanie Zamawiającemu całości dokumentacji  dot. sporządzenia planu w tym m. in. projektu Uchwały Rady Gminy Sońsk wraz z prognozą skutków finansowych  uchwalenia planu miejscowego oraz przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Sońsk w sprawie planu miejscowego	Projektant	14 dni		3 %

………..zł	
	2. Weryfikacja przedłożonego materiału oraz przekazanie materiału na sesję Rady Gminy Sońsk	Zamawiający	-	7 dni	-	
ETAP VI	1. Przekazanie Zamawiającemu aktualizacji wersji elektronicznej i papierowej obowiązujących planów miejscowych gminy Sońsk z uwzględnieniem sporządzonego planu miejscowego wraz z przekazaniem metadanych dla sporządzonego planu miejscowego	Projektant	7 dni		7 %

………..zł	
	2. Weryfikacja przedłożonego materiału	Zamawiający	-	7 dni	-	
czas realizacji projektu oraz procedury sporządzenia planów (Projektant)	291 dni	-	-	
czas realizacji procedury sporządzenia planów (Zamawiający)	-	42 dni	-	
czas realizacji przedmiotu umowy	333 dni	-	
koszt realizacji przedmiotu umowy 	100 %
………..  zł